ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилищного фонда 
Слонимского района на 2025 год

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
	
№
п/п	Наименование объекта	Общая продолжительность строительства	Сроки проведения капитального ремонта	Стоимость 1 кв. м, руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация	
			начало
месяц, год	окончание
месяц, год				

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 2 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	09.2025	12.2025		Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
2.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 6 в г. Слониме (в том числе ПИР)	4	09.2025	12.2025		Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение
 молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
3.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Танкистов, 2 в агрогородке Большие Шиловичи Слонимского района (в том числе ПИР)	2,5	06.2025	09.2025		Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
4.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Танкистов, 2а в агрогородке Большие Шиловичи Слонимского района (в том числе ПИР)	3,0	06.2025	11.2025		Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
5.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 13/3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	08.2025	11.2025		Капитальный ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты                	ДП «Слонимская МПМК-163»	
6.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, 103/6 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	08.2025	12.2025		Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей канализации и электроснабжения, ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
7.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, 109   в г. Слониме (в том числе ПИР)	4,0	01.2025	06.2025		Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт входных групп, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
8.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 9   в г. Слониме (в том числе ПИР)	4,0	01.2025	07.2025		Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
9.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 15/1    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	01.2025	06.2025		Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
10.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 15/2    в г. Слониме (в том числе ПИР)	4,0	01.2025	06.2025		Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
11	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 13/2    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	06.2025	11.2025		Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
12	Капитальный ремонт жилого дома по пер. Менделеева, 14    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	01.2025	07.2025		Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
13	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, 65    в г. Слониме (в том числе ПИР)	2,5	07.2025	11.2025		Замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ООО «ВремяСтрой»	
14	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Южная, 31 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	06.2025	11.2025		Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
15	Капитальный ремонт жилого дома по пер.1- Лесной, 11 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	06.2025	09.2025		Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
16	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 60Б в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	01.2025	07.2025		Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»	
17	Капитальный ремонт общежития по ул. Брестская, 69/4 в г. Слониме (в том числе ПИР)	5	06.2025	11.2025		Ремонт стыков стеновых панелей, замена окон и дверей в объеме всего здания, ремонт мест общего пользования, ремонт пожарной сигнализации, сетей электроснабжения	ООО «Зодчий»	
18	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Школьная, 7 в аг. Сосновка Слонимского района (в том числе ПИР)	2	01.2025	04.2025		Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	ДП «Слонимская МПМК-163»