ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилищного фонда 
Слонимского района на 2023 год

Наименование объекта	

Общая площадь квартир жилых домов, квадратных метров	

Ввод площади в текущем году, квадрат-ных метров	Сроки проведения капитального ремонта	Стоимость проведения капитального ремонта, рублей	
Использовано средств на 01.01.2023, рублей	План финансирования на 2023 год, рублей	
			начало (месяц, год)	окончание 
(месяц, год)	
сметная	
договорная		Всего	в том числе	
									кредиторская задолженность на 01.01.2023	стоимость работ на 2023 год	
										бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Объекты с вводом площади в текущем году	
1. Жилой дом по ул. Черняховского, 17 в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	1791	1791	06.2023	09.2023	392626,00	297285,00	21378,45	392626,00			392626,00	
2.Жилой дом по ул. Красноармейская, 83а в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3166,8	3166,8	04.2023	09.2023	958808,00	902034,15	33550,61
	958808,00			958808,00	
3.Капитальный ремонт  с элементами модернизации общежития по ул. Коммунальная,14 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2486,8	2486,8	01.2023	05.2023	1326471,00	1289700,89	517295,58	772405,31		772405,31		
4.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул.  Тополевая, 31/1 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2392	2392	09.2023	12.2023	614417,00		5805,38	614417,00		614417,00		
5.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома  по ул. Черняховского, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2049	2049	03.2023	06.2023	875280,00	656948,65	15336,60	641612,05		641612,05		
6.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Тополевая, 31 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2139	2139	04.2023	09.2023	394693,00	349273,95	5120,00	394693,00		394693,00		
7.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Янки Купалы, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2067,1	2067,1	06.2023	09.2023	875280,00	711092,17	23323,04	875280,00		875280,00		
8.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Ершова, 38 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3979,6	3979,6	09.2023	12.2023	883793,00		27272,88	601800,00		601800,00		
9.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Франциска Скорины, 25 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2378,6	2378,6	04.2023	07.2023	595870,00	553242,87	22228,06	553285,87			553285,87	
10.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Брестская, 93 в г. Слониме (в том числе ПИР)	4461,8	4461,8	09.2023	12.2023	1143175,00		29197,67	631833,84		631680,64	153,20	
11.Жилой дом по пер. Аптечный,8 в г. Слониме. Капитальный ремонт кровли и фасада (в том числе ПИР)	387	387	09.2023	12.2023	478077,00			491377,00		478077,00	13300,00	
ИТОГО		27299,0			8537490,00	4759577,68	1979921,60	6928138,07		5009965,00	1918173,07	

Объекты  без ввода площади в текущем году		

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов	
12. Жилой дом по ул. Пушкина, 23 в г. Слониме. Капитальный ремонт  вентиляционных шахт (в том числе ПИР)	510		11.2022	01.2023	115 560,00	103949,53	99536,00	26193,02	17938,36		8254,66
	
13.Жилой дом по ул. Первомайская, 8 в г. Слониме. Капитальный ремонт вентиляционных шахт (в том числе ПИР)	921		09.2023	11.2023		13104,00		130000,00			130000,00	
ИТОГО	1431				115560,00	117053,53	99536,00	156193,02	17938,36		138254,66	
Разработка проектно-сметной документации 	
14.Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 2 в г. Слониме (в том числе ПИР)	225,9		03.2023	12.2023				25000,00			25000,00	
15. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Черняховского, 6 в г. Слониме (в том числе ПИР)	646		09.2023	12.2023				30000,00			30000,00	
16. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Советская, 60 в г. Слониме (в том числе ПИР)	295,7		04.2023	09.2023				12727,00		12727,00		
17. Капитальный ремонт общежития по ул. Брестская, 69/1 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3517,5		04.2023	09.2023				36051,00			36051,00	
18. Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, 81 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3755		04.2023	09.2023				36138,00		36138,00		
19. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Брестская, 95  в г. Слониме (в том числе ПИР)	4637		06.2023	10.2023				30334,00			30334,00	
20. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Брестская, 107   в г. Слониме (в том числе ПИР)	4192		06.2023	10.2023				28726,00			28726,00	
21. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Франциска Скорины, 11   в г. Слониме (в том числе ПИР)	2262,2		03.2023	07.2023				23569,77			23569,77	
22. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Франциска Скорины, 15   в г. Слониме (в том числе ПИР)	2290		03.2023	07.2023				24083,86			24083,86	
23. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Ботаническая, 2   в г. Слониме (в том числе ПИР)	1592,2		06.2023	10.2023				33528,00			33528,00	
24. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Боровая, 42 в г. Слониме (в том числе ПИР)	274		07.2023	11.2023				13996,00		13996,00		
25. Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 17/2    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3293		07.2023	07.2023				32703,56			32703,56	
26. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Молодежная, 31 в аг. Мижевичи Слонимского района (в том числе ПИР)	174,8		07.2023	11.2023				8786,00			8786,00	
27. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Школьная, 6 в аг. Сосновка  Слонимского района (в том  числе  ПИР)	422,8		07.2023	11.2023				16316,00		16316,00		
28. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Школьная, 7  в аг. Сосновка  Слонимского района (в том числе ПИР)	278,1		07.2023	11.2023				11225,00		11225,00		
29. Капитальный ремонт жилого дома по пер. Водопроводному, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	449		03.2023	11.2023				26000,00		26000,00		
30. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Советской, 60Б в г. Слониме (в том числе ПИР)	646		09.2023	11.2023				29000,00		29000,00		
ИТОГО		27300,7						418184,19		145402,00	272782,19	
ВСЕГО		27300,7			8654050,00	4876631,21	2079457,60	7502515,28	17938,36	5155367,00	2329209,92	
            *будет уточнено в течение года

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда	
№
п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта	Стоимость 1 кв. м, руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация	
			начало
месяц, год	окончание
месяц, год				

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1.  Жилой дом по ул. Черняховского, 17 в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3,0	06.2023	09.2023	165,116	Капитальный ремонт балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования,  утепление чердачного перекрытия, утепление наружных поверхностей торцевых стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей электроснабжения, выполнение молниезащиты              		
2.	2. Жилой дом по ул. Красноармейская, 83а в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3,5	04.2023	09.2023	257,00	Капитальный ремонт балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования,  утепление наружных поверхностей торцевых стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, выполнение молниезащиты    		
3.	3. Капитальный ремонт  с элементами модернизации общежития по ул. Коммунальная,14 в г. Слониме(в том числе ПИР)	3	01.2023	05.2023		Капитальный ремонт балконов (лоджий), ремонт кровли, замена окон, дверей, электрических плит, сантехнического оборудования, ремонт внутренней отделки помещений,  утепление наружных поверхностей стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в здание, восстановление отделки цоколя, ремонт отмостки,  замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, пожарной сигнализации     		
4.	4. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул.  Тополевая, 31/1 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	09.2023	12.2023	238,160	Капитальный ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей,  ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты		
5.	5. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома  по ул. Черняховского, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	03.2023	06.2023	244,765	Капитальный ремонт балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования,  утепление чердачного перекрытия, утепление наружных поверхностей торцевых стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, выполнение молниезащиты                    		
6.	6. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Тополевая, 31 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	04.2023	09.2023	155,346	Капитальный ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей,  ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты  		
7.	7. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Янки Купалы, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	06.2023	09.2023	348,00	Утепление наружных торцевых стен; полная замена кровельного покрытия с устройством защитного покрытия парапетов из оцинкованной стали; устройство козырьков над балконами 5-го этажа; устройство новой отмостки, ремонт крылец; ремонт балконов, замена окон  и дверей (входы в секции и техподполье) в местах общего пользования; замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, устройство системы уравнивания потенциалов, выполнение молниезащиты,  устройство системы уравнивания потенциалов, выполнение молниезащиты		
8.	8. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Ершова, 38 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	09.2023	12.2023	200,290	Ремонт лоджий, замена окон в местах общего пользования,  утепление наружных поверхностей торцевых стен, ремонт стыков стеновых панелей, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, выполнение молниезащиты		
9.	9. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Франциска Скорины, 25 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	04.2023	07.2023	227,663	Утепление наружных торцевых стен с последующей защитно-отделочной штукатуркой и окраской силиконовой фасадной краской; ремонт стыков стеновых панелей; полная замена кровельного покрытия; ремонт балконов замена окон  и дверей (входы в секции и техподполье) в местах общего пользования; замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, устройство системы уравнивания потенциалов, выполнение молниезащиты		
10.	10. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Брестская, 93 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	09.2023	12.2023	225,536	Ремонт лоджий, замена окон в местах общего пользования,  утепление наружных поверхностей торцевых стен, ремонт стыков стеновых панелей, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения