ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилищного фонда 
Слонимского района на 2023 год
,

Наименование объекта	

Общая площадь квартир жилых домов, квадратных метров	

Ввод площади в текущем году, квадрат-ных метров	Сроки проведения капитального ремонта	Стоимость проведения капитального ремонта, рублей	
Использовано средств на 01.01.2022, рублей	План финансирования на 2023 год, рублей	
			начало (месяц, год)	окончание 
(месяц, год)	
сметная	
договорная		Всего	в том числе	
									кредиторская задолженность на 01.01.2022	стоимость работ на 2023 год	
										бюджет	сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Объекты с вводом площади в текущем году	
1. Жилой дом по ул. Черняховского, 17 в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	1791	1791	03.2023	06.2023	345649,00	288482,00	21378,45	288482,00			288482,00	
2.Жилой дом по ул. Красноармейская, 83а в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3166,8	3166,8	03.2023	07.2023	883072,00	906728,00	33550,61
	906728,00			906728,00	
3.Капитальный ремонт  с элементами модернизации общежития по ул. Коммунальная,14 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2486,8	2486,8	01.2023	04.2023	1326471,00	1149368,06	526538,00	799932,40		799932,40		
4.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул.  Тополевая, 31/1 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2392	2392	04.2023	07.2023	589026,00**	14513,46	5805,38	9000,00*		9000,00*		
5.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома  по ул. Черняховского, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2049	2049	05.2023	09.2023	752194,00	690000,00	15336,60	690000,00		690000,00		
6.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Тополевая, 31 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2139	2139	04.2023	07.2023	355327,00	313404,00		313404,00		313404,00		
7.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Янки Купалы, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2067,1	2067,1	07.2023	11.2023	770936,00	728451,00	23323,04	728451,00		728451,00		
8.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Ершова, 38 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3979,6	3979,6	06.2023	10.2023	810028,00		27272,88	13677,00*		13677,00*		
9.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Франциска Скорины, 25 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2378,6	2378,6	04.2023	07.2023	652388,00	598892,00	22228,06	598982,00			598982,00	
10.Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Брестская, 93 в г. Слониме (в том числе ПИР)	4461,8	4461,8	06.2023	09.2023	1025039,00		29197,67	13000,00*		13000,00*		
11.Жилой дом по пер. Аптечный,8 в г. Слониме. Капитальный ремонт кровли и фасада (в том числе ПИР)	389	389	02.2023	06.2023	327874,00			643300,00		630000,00	13300,00	
ИТОГО		27300,7			7838004,00	4689838,52	704631,29	5004956,40		3197464,40	1807492,00	

Объекты  без ввода площади в текущем году		

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов	
12. Жилой дом по ул. Пушкина, 23 в г. Слониме. Капитальный ремонт  вентиляционных шахт (в том числе ПИР)	510		11.2022	01.2023	115 560,00	103 949,53	32 014,77	42468,64	17938.36		24530.28
	
13.Жилой дом по ул. Первомайская, 8 в г. Слониме. Капитальный ремонт вентиляционных шахт (в том числе ПИР)	921		04.2023	09.2023				130000,00			130000,00	
ИТОГО	1431				115560,00	103949,53	32014,77	172468,64	17938.36		154530.28	
Разработка проектно-сметной документации 	
14.Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 2 в г. Слониме (в том числе ПИР)	225,9		04.2023	09.2023				4 000,00		4 000,00		
15. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Черняховского, 6 в г. Слониме (в том числе ПИР)	718		04.2023	09.2023				8 000,00		8 000,00		
16. Капитальный ремонт  дома по ул. Советская, 60 в г. Слониме (в том числе ПИР)	295,7		04.2023	09.2023				4 000,00		4 000,00		
17. Капитальный ремонт по ул. Брестская, 69/1 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3517,5		04.2023	09.2023				30 000,00			30 000,00	
18. Капитальный ремонт дома по ул. Брестская, 81 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3755		04.2023	09.2023				30 000,00		30 000,00		
19. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Брестская, 95  в г. Слониме (в том числе ПИР)	4637		06.2023	10.2023				32 000,00			32 000,00	
20. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Брестская, 107   в г. Слониме (в том числе ПИР)	4192		06.2023	10.2023				30 000,00			30 000,00	
21. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Франциска Скорины, 11   в г. Слониме (в том числе ПИР)	2262,2		06.2023	10.2023				25 000,00			25 000,00	
22. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Франциска Скорины, 15   в г. Слониме (в том числе ПИР)	2290		06.2023	10.2023				25 000,00			25 000,00	
23. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Ботаническая, 2   в г. Слониме (в том числе ПИР)	1592,2		06.2023	10.2023				*		*		
24. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Боровая, 42 в г. Слониме (в том числе ПИР)	274		07.2023	11.2023				4 000,00		4 000,00		
25. Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 17/2    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3293		07.2023	11.2023				28000,00			28000,00	
26. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Молодежная, 31 в аг. Мижевичи Слонимского района (в том числе ПИР)	174,8		07.2023	11.2023				*			*	
27. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Школьная, 6 в аг. Сосновка  Слонимского района (в том  числе  ПИР)	422,8		07.2023	11.2023				7902,60		7902,60		
28. Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Школьная, 7  в аг. Сосновка  Слонимского района (в том числе ПИР)	278,1		07.2023	11.2023				*		*		
29.Замена лифта в жилом доме по ул. Брестская, 103/6 в г. Слониме ( в том  числе  ПИР)	2838		08.2023	11.2023				5029,98			5029,98	
ИТОГО		27300,7						232932,58		57902,6	175029,98	
ВСЕГО		27300,7			7953564,00	4793788,05	736646,06	5410357,62	17938.36	3255367,00	2137052.26	
            *будет уточнено в течение года
**предварительная стоимость, будет уточнена после прохождения государственной экспертизы

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда	
№
п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта	Стоимость 1 кв. м, руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация	
			начало
месяц, год	окончание
месяц, год				

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1.  Жилой дом по ул. Черняховского, 17 в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3,0	03.2023	06.2023	165,116	Капитальный ремонт балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования,  утепление чердачного перекрытия, утепление наружных поверхностей торцевых стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей электроснабжения, выполнение молниезащиты              		
2.	2. Жилой дом по ул. Красноармейская, 83а в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3,5	05.2023	08.2023	257,00	Капитальный ремонт балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования,  утепление наружных поверхностей торцевых стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, выполнение молниезащиты    		
3.	3. Капитальный ремонт  с элементами модернизации общежития по ул. Коммунальная,14 в г. Слониме(в том числе ПИР)	3	01.2023	04.2023		Капитальный ремонт балконов (лоджий), ремонт кровли, замена окон, дверей, электрических плит, сантехнического оборудования, ремонт внутренней отделки помещений,  утепление наружных поверхностей стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в здание, восстановление отделки цоколя, ремонт отмостки,  замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, пожарной сигнализации     		
4.	4. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул.  Тополевая, 31/1 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3*	04.2023	08.2023	*	Капитальный ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей,  ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты		
5.	5. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома  по ул. Черняховского, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	05.2023	09.2023	209,00	Капитальный ремонт балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования,  утепление чердачного перекрытия, утепление наружных поверхностей торцевых стен, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, выполнение молниезащиты                    		
6.	6. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Тополевая, 31 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	04.2023	08.2023	143,840	Капитальный ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей,  ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты  		
7.	7. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Янки Купалы, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	07.2023	10.2023	307,00	Утепление наружных торцевых стен; полная замена кровельного покрытия с устройством защитного покрытия парапетов из оцинкованной стали; устройство козырьков над балконами 5-го этажа; устройство новой отмостки, ремонт крылец; ремонт балконов, замена окон  и дверей (входы в секции и техподполье) в местах общего пользования; замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, устройство системы уравнивания потенциалов, выполнение молниезащиты,  устройство системы уравнивания потенциалов, выполнение молниезащиты		
8.	8. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Ершова, 38 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	06.2023	10.2023	182,168	Ремонт лоджий, замена окон в местах общего пользования,  утепление наружных поверхностей торцевых стен, ремонт стыков стеновых панелей, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, выполнение молниезащиты		
9.	9. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Франциска Скорины, 25 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	04.2023	07.2023	243,618	Утепление наружных торцевых стен с последующей защитно-отделочной штукатуркой и окраской силиконовой фасадной краской; ремонт стыков стеновых панелей; полная замена кровельного покрытия; ремонт балконов замена окон  и дверей (входы в секции и техподполье) в местах общего пользования; замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, устройство системы уравнивания потенциалов, выполнение молниезащиты		
10.	10. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Брестская, 93 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	06.2023	10.2023	205,596	Ремонт лоджий, замена окон в местах общего пользования,  утепление наружных поверхностей торцевых стен, ремонт стыков стеновых панелей, устройство организованной системы водостока с козырьков над входами, ремонт крылец входов в подъезды, восстановление отделки цоколя, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения